「 그린바이오 벤처캠퍼스 조성사업 기본 및 실시설계 」

과 업 지 시 서

2023. 09.

- 목    차 -

Ⅰ. 일반사항	1

1. 과업 개요	1

2. 과업의 범위	2

Ⅱ. 과업의 내용	3

1. 일반사항	3

2. 과업수행 및 보고	4

3. 업무협의 및 공정보고	5

4. 기타 준수사항	7

Ⅲ. 설계 일반지침	11

1. 볍령 등의 적용기준	11

2. 일반사항	12

3. 시설운영계획	15

4. 시설 개요 및 면적 기준	17

5. 분야별 설계지침	18

Ⅳ. 설계 단계별지침	34

1. 계획설계	34

2. 중간설계	35

3. 실시설계	36

4. 분야별 설계요령	37

Ⅴ. 제출도서 및 작성기준	41

Ⅵ. 각종서식	51

Ⅰ	일반사항

1. 과업 개요

가. 과 업 명 : 「그린바이오 벤처캠퍼스 조성사업」기본 및 실시설계

나. 과업목적

강원도 전략 사업과 연계한 그린바이오 산업 성장동력 확보 필요

강원도 기존 벤처·스타트업 육성 시설 및 프로그램의 한계 극복 필요

그린바이오 벤처캠퍼스 조성을 통해 입주기업, 지원기관, 수요기관, 서울대 평창 캠퍼스 이해관계자 등 강원도 특화 분야 벤처 네트워크 인프라 조성

그린바이오 벤처캠퍼스 조성을 통해 그린바이오 기업에 특화된 인프라  (사무공간·연구공간·네트워킹 공간 등)을 제공하고 그린바이오 유망 벤처· 창업 기업을 한곳에 집적화하여 육성하는 그린바이오 산업 생태계 구축

다. 과업개요

1) 사업위치: 강원도 평창군 대화면 신리 일원(서울대학교 산학협력부지)

2) 부지면적 : 18,765㎡

3) 건축규모 : 연면적 5,700㎡ (테라스 면적 300㎡ 제외)

4) 추정공사비 : 금19,100,000,000원(금일백구십일억원, VAT포함)

5) 추정설계비 : 금816,020,000원(금팔억일천육백이만원)

* VAT·손배료·인증 포함

- 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방, 철거, 각종 인증 및 심의 등 제반 분야의 기본 및 실시설계 용역 수행 등의 일체 비용

- 녹색건축물(우수등급), 에너지효율등급(1++), 제로에너지(4등급), 장애물 없는 생활환경(우수등급) 인증 (각종인증은 예비인증, 본인증 포함)

- 지질조사비, 현황측량비, 설계VE, 인증수수료는 발주처 별도 집행

6) 주용도 : 교육연구시설

7) 설계기간 : 착수일로부터 210일(공휴일 포함)

2. 과업의 범위

가. 설계범위

1) 건축·기계·토목·조경, 전기, 통신, 소방설비, 폐기물 등 전 분야의 관련 법령, 규정 및 지침에 따라 설계하며 계획, 중간, 실시 설계도서를 작성한다.

2) 업무비율은 건축+기계+부대토목(80%)이며, 전기+통신+소방+조경(20%)로 한다.

나. 과업범위

건축, 토목, 조경, 전기, 통신, 소방, 기계설비 등의 기본·실시설계도서, 공사시방서, 각종 심의·인증 자료 등 작성

기본·실시설계 도면 작성, 사후 설계관리 업무(건축물관리대장 생성 및  준공 서류 지원)

에너지절약계획서, 건축물 에너지효율등급(1++), 제로에너지인증(4등급), 녹색건축물(우수등급 이상) 및 장애물 없는 생활환경(우수등급) 인증에 대한 서류작성, 건축인허가 관련 서류, 건축구조안전 및 내진설계확인서, 각 실별 기준실 수 및 기준면적대비표, 기타 법령에 의한 서류 작성 등 행정절차 제반사항

용역착수 후 현장을 답사(반드시 발주자와 함께 유사 현장을 추가 답사하고 답사 보고서를 제출)하고, 인·허가 관청 방문·협의, 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가를 취득하기 위한 선결조건을  파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출

수급인은 본 용역이 완료된 후라도 인·허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주자의 요청이 있을 시 적극 협조

1) 사업추진 및 각종 위원회 자문심의, 평가 등 업무 협조 지원

2) 공사 발주 관련, 공종별 현장설명서 작성, 공사 예정공정표 작성

3) 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 발주자(감독관)가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 보고서 작성

4) 설계는 현황측량을 우선 실시하여 측량성과도를 기준으로 진행

5) 설계 경제성 검토(VE)를 위한 자료 작성(기본설계 완료 후, 실시설계 완료 전)

6) 건축서비스산업 진흥법 제22조에 따른 설계의도 구현 시행(참여설계자의 확인서 제출)

7) 기타 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주자와 수급인의 협의하에 수행한다.

다. 과업기간

착수일로부터 210일 (공휴일 포함, 기본설계 90일, 실시설계 120일, 각종 인증 및 인허가 심의)

□ 계약상대자는 용역계약일반조건 제18조의 3항, 제19조, 제24조 및 다음의   경우에 공사의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

(1) 과업수행과 관련한 협의기관(협조부서)의 업무처리 지연으로 과업수행에  차질을 초래한다고 발주처가 판단할 때

(2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

(3) 천재지변으로 인하여 업무수행이 불가능할 때

(4) 발주처의 방침변경 또는 지시에 의한 때

Ⅱ	과업의 내용

1. 일반사항

1) 용역 수행은 본 과업지시서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자가 보다 합리적인 방안으로 연구 발전시킨다.

2) 수급인은 국내 타 시·도의 유사시설을 현장 견학하여 외관, 기능, 주요 마감자재, 유지관리, 문제점 등을 충분히 조사·분석한 후 건립 취지에 맞게   설계에 반영하여야 한다.

3) 설계용역 수행자는 본 과업을 수행함에 있어 발주자와 수시로 협의하고 협의된 사항을 설계에 최대한 반영하여야 한다.

2. 과업수행 및 보고

가. 착수계 및 기타 제출서류

1) 수급인은 계약일로부터 7일 이내에 용역착수하고 다음 서류를 발주기관에  제출해야 한다.

(1) 착수계 1부.

(2) 책임기술자 선임계 1부 [서식1]

(3) 설계용역 참여기술자 현황(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 1부 [서식2]

(4) 과업수행계획서 1부(인력·장비 투입계획[서식12], 예정공정표, 조직표)

(5) 설계용역수행 조직표(연락처 기재) 1부 [서식4]

(6) 각 공종(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)의 분야별 참여자 명단 [서식5], 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서, 이력서 등 각 1부

(7) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담 이행자 용역수행 내역서 포함) 1부

(8) 보안각서(보안계획서 포함) 각 1부 [서식7]

(9) 하도급 승인 요청서(착수 후 30일 이내 제출) 1부 [서식3]

(10) 분야별 참여자 명단 [서식5] (기술자격증 사본·경력증명서 각 1부)

(11) 설계용역 예정공정표 1부

(12) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 사항

나. 과업수행계획서 제출 및 착수보고회

1) 수급인은 계약일로부터 14일 이내에 아래 내용이 포함된 과업수행계획서를작성 제출하여 발주처의 확인을 받고, 착수보고회를 실시하여야 한다.

2) 관련분야별(건축, 구조, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방설비 등) 업무범위와 책임한계

3) 분야별 책임기술자 및 참여기술자 조직표, 연락처

(1) 전문분야별 기술자 중에 견적 및 내역작성업체, 공법, 기술을 지원하는 전문건설업체 등도 포함하여 실질적인 관련분야별 작업반이 구성되도록 하여야 한다.

(2) 각 분야별 설계는 관련법에 의한 설계자가 설계하여야 한다.

4) 예정공사비를 고려한 설계운용계획

(1) 발주처가 예측할 수 없었던 공사비의 과도한 증액이나 부실설계 및 시공 시 설계변경에 의한 공사비 증액이 발생하지 않도록 수급인은 관리도구를 활용하여 공사비 통제를 하여야 하며, 초기 단계부터 예측 가능한 설계를 위해 전문분야별 설계용역 협력업체와의 긴밀한 협조체계구축 방안을  제출하여야 한다.

(2) 본 과업내용 중 설계지침 상 친환경적 계획요소로서 자원의 효율적 활용 등 설계조건의 반영 정도를 판단하기 위하여 여러 공법 및 시공등급별로 소요공사비용을 면밀하게 검토, 제출하여야한다.

(3) 목표예산 범위 내에서 설계하여야 하며, 다음 항에서 규정된 업무협의 및 중간검토 단계별로 추정 공사비를 과학적, 합리적인 방법으로 산출 하여야 한다.

5) 본 과업을 수행함에 있어 필요한 법적 준수사항을 확인 및 필요한 사항을 제출(단 확인하지 못하여 발생하는 사항은 수급인의 책임으로 한다).

6) 기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

3. 업무협의 및 공정보고

설계자는 계획안 등 전 설계과정에서 정기적으로 진행사항을 보고하여야 하며, 주요공법, 자재선정 등 모든 설계과정에서 발주처와 충분한 협의를 통하여   발주처가 의도하는 사항이 충분히 반영되도록 한다.

가. 착수보고

1) 업무 착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 14일 이내에 장소와 일자를 협의     하여 개최한다.

2) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행     계획을 설명하여야 한다.

※ 설계안 확정을 위한 조감도(설계공모 심사의견, 발주자 의견 등 반영) 포함

나. 중간보고, 완료보고

1) 설계자는 기본·실시설계(안)을 작성하여 기본 설계보고회를 발주기관에서   반드시 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

다. 수시보고

1) 주간공정보고, 월간공정보고를 [서식9, 10]에 의거 제출하고, 설계용역 진행시
발생되는 문제점을 분석하여 해결책을 수시로 보고한다.

라. 업무회의

1) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대해 발주자와 협의하고자 하는 경우에는 수요기관의 의견을 수렴하여 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다. 회의 결과는 [서식11]에 의거 제출.

2) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 발주자와 협의하여 결정하여야 한다.

3) 본 과업지시서는 기본적인 사항에 관한 것으로 수급인은 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

4) 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을   협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

5) 설계자는 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적·보완·수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

마. 기타회의

1) 발주기관의 필요에 따라 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이때 과업수행자는 발주기관의 요청에 따라 해당 검토서 등 관련자료를 작성, 제출하여야 한다.

2) 설계진행 시 문제점이 발생하거나, 기본설계, 실시설계 보고에 필요한 자료를 작성·배부하고 회의를 개최한다.

3) 필요에 따라 회의 진행에 관한 세부사항은 발주부서에서 별도 통보할 수 있다.

4. 기타 준수사항

가. 자료조사 및 제출

1) 수급인은 기본·실시설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며 최신시설이 되도록 노력해야 한다.

2) 수급인은 과업수행 중 심의회 개최 등을 위하여 발주자로부터 자료제출 요구가 있을 시 이에 응하여야 하며 자료제출 등을 위한 비용은 설계용역 수행자가 부담한다.

3) 수급인은 설계 전 반드시 현장 확인하고 각종 인입위치 선정 등에 있어 확인 결과를 설계에 반영하여야 한다.

나. 관급자재의 선정

1) 근거 규정

(1)「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제83조 및「지방자치   단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제86조와「중소기업제품  구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정·고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매 규정에 따라 관급    자재를 선정하여야 한다.

(2) 대상제품 : 예정가격 20억 원 이상인 종합공사 및 3억원 이상의 전문전기전보통신소방시설공사에 소요되는 자재 중 추정가격이 3천만 원 이상인 품목   -「조달청 시설공사 맞춤형서비스 관급자재 선정 운영기준」(조달청 훈령)

2) 설계용역 수행자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재리스트 및 관급자재 선정검토서를 적기에 작성하여 제출하여야 한다.

3) 설계용역 수행자는 관급자재 선정심의에 필요한 자료 작성 시 감독관과 긴밀히 협조하여 관급자재 선정심의 운영에 적극 협조하여야 한다.

다. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

(1) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

(2) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

(3) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

(4) 건설공사의 수량 및 견적업무

(5) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급 하는 업무에 대하여 관계 법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

라. 에너지절약형 건축물 설계

1) 관련 규정

(1) 녹색건축물 조성 지원법

(2) 녹색건축 인증에 관한 규칙

(3) 건축물 에너지효율등급 인정에 관한 규칙

(4) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

(5) 건축물의 에너지절약 설계기준

2) 「건축물의 에너지절약 설계기준」에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 사전협의 실시

(1) 사전협의 내용

① 에너지절약형 설계

② 고효율에너지 기자재 사용

(2) 제출서류

① 건축협의시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거서류

② 공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

③ 고효율에너지기자재 적용 체크리스트

④ 관련자료 USB

⑤ 기타 증빙서류

3) 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」제9조에 의거하여「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급·보급촉진법」시행령에 따라 신·재생 에너지 설비를 의무적으로 설치하여야 하며, 건축허가 전에 신·재생에너지 설비     계획서를 신· 재생에너지센터에서 검토받아 설계 반영하여야 한다.

(1) 건물완공시점을 기준으로「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급    촉진법」시행령에서 정한 공급의무 비율을 적용하되 발주처와 협의하여  조정할 수 있다.

(2) 설비 설치시 신·재생에너지전문기업을 통하여 설치하여야 하며,「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」에 의한 표준화설비·인증설비·공용화 품목이 있을 경우에는 이를 우선 적용하여야 한다.

4) 공공기관에서「녹색건축물 조성 지원법」에 따른 친환경건축물 인증 의무  대상은 공공기관에서 건축하는 연면적 합계가 3,000㎡ 이상인 공공건축물이 대상이므로, 친환경건축물의 인증 업무를 수행하여야 한다.

5) 건축물 에너지효율 등급(1++) 인증에 관한 신청서, 근거서류 등 작성·제출

마. 정산 및 책임

1) 발주자는 설계용역 수행자에게 사전 통보하고 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 용역수행자는 이에 따라야 한다.

2) 과업수행 중지 또는 과업내용의 증감이 발생할 경우는 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다. 단, 과업범위의 현저한 변경이 없이 기본 및 실시설계 결과, 과업제시 기준 공사비를 초과한 부분에 대하여는 용역비를 증액 지급하지 않는다.

3) 설계용역비가 과다 계상된 경우 발주자는 설계 납품 완료 이후라도 설계 용역수행자에게 변상을 요구할 수 있고 설계용역 수행자는 즉시 이를 이행하여야 하며 이와 관련하여 민·형사상 소를 제기할 수 없다.

4) 용역설계에 의한 공사시공 중 아래와 같은 설계도서상의 하자로 인한 피해 발생 시 설계용역 수행자는 손해배상 등 그에 대한 책임을 져야 한다.

- 누락, 오류, 과다 계상 등 설계내역서가 부적절할 경우

- 설계자 및 하도급 업자의 사전조사 및 자료 분석 미비 등으로 인하여 기술상 중대한 결함이 발생하여 이에 따라 경제적 손실 및 공사 진행에 지장을 초래 했을 경우 등

바. 관계 사항 숙지 의무

1) 설계용역 수행자는 본 과업지시서 내용을 포함하여 본 용역 시행과 관련한 전반사항을 숙지하고 업무를 수행하여야 하며, 이를 숙지하지 않아서 발생되는   제반 문제에 대하여 책임을 진다.

2) 본 과업지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주자와 협의하여 결정하며, 이견이 있을 경우 감독자의 의견에 따른다.

3) 본 과업지시서에 규정되지 않은 사항은 건설공사 조사 및 시험규정, 한국산업규격 등 관련 규정에 따라 발주자와 협의하여 수행한다.

4) 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 필요하다고 인정하는 중요사항은 최대한 발주자의 지시에 따라 과업을 수행하여야 한다.

5) 설계용역 수행자는 과업 수행 중 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 그 손실을 보상하여야 한다.

6) 발주자가 설계용역 수행자의 대리인이나 고용인이 과업 수행에 부적당하다고 인정할 때는 과업 수행 중이라도 즉시 교체를 명할 수 있다.

7) 설계도서의 작성은 국토교통부 고시 설계도서 작성 기준에 의하여 작성하여야 하며 설계 도면에는 설계자, 검수자, 확인자 등 서명날인 하여야 한다.

Ⅲ	설계 일반지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 법령 등의 적용기준

1) 본 과업은 기술(설계)용역계약특수조건 제11조(법령등의준수)에 의거 건축법, 건축사법, 국가기술자격법, 엔지니어링산업 진흥법, 에너지이용합리화법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 농지법, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률, 상수도법, 하수도법, 환경영향평가법, 도로법, 주차장법, 도시 공원법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 소방법, 전기사업법, 전기공사법, 전력기술관리법, 전기통신기본법, 전기통신사업법, 전파법, 정보통신공사업법, 소음진동관리법, 산업안전보건법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 법, 령, 고시, 예규, 규정, 훈령, 지방자치단체의 조례 등에 위배 또는 저촉사항이 없도록 하여야 한다.

2) 소방시설공사업법 제11조에 의한 소방시설기준 및 전기사업법 67조에 의한 전기설비기준 등에 적합하게 설계한다.

3) 설계도서의 작성방법은 건설기술관리법 제23조의 2(설계도서의 작성 등), 건설기술관리법시행규칙 제14조의 2(설계도서의 작성), 건설교통부고시   설계도서 작성기준 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

나. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)의 규정에 의하여 조치하여도 이의를  제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을   져야하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될  때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령  (건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2. 일반사항

가. 설계일반사항

1) 그린바이오 벤처캠퍼스는 안전성이 주요하게 고려되어야 하며, 사업의 목적, 건물의 용도 및 성격 등에 부합되도록 계획한다.

2) 대상지의 지리적 특성을 적극 활용하여, 주변 환경 및 경관과 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다.

3) 건물 내외장재는 충분한 오염방지 기능 및 내구성을 갖추어야 하며 일상 점검 및 유지관리에 용이한 재료와 구조가 되도록 계획한다.

4) 생애주기비용(Life Cycle Cost)의 저감 방안을 충분히 반영하여 유지관리비가   절감되도록 계획한다.

5) 건축, 조경, 실내환경 등 모든 공간계획에 유니버셜디자인(Universal Design)의 개념을 적용하여 누구나 이용이 편리하도록 계획한다.

6) 건축물에너지효율 등급(1++) 인증, 녹색건축물 등급(우수등급) 인증, 제로에너지건축물 등급(4등급 이상) 인증, 장애물 없는 생활환경(우수등급) 인증 등 관계법령에 해당되는 인증을 받을 수 있도록 계획한다.

7) 납품은 기본설계 및 실시설계 단계별로 구분하여 납품한다.

8) 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며 “갑”의 확인을 받아야 한다.

9) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신, 폐기물처리 등 기타 부대공사에 대한 설계는 관련법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준이상으로 한다.

10) 설계는 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

11) 설계자는 건축법, 문화재보호법, 농지법, 환경정책기본법, 소방법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하고 계약 이행에 문제가 있을  경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의해서 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

12) 건축법시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의  건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

13) 대지의 입지조건에 적합하고 신기술을 최대한 도입하여 합리적인 설계를 하여야 한다.

14) 공사비는 원가계산 작성준칙에 의하여 작성하되, 수량 및 단가산출은   건설교통부 한국건설기술연구원에서 고시한 실적공사비로 하고 기준이 없을시 정부제정 건설공사 표준품셈, 정부고시가격, 최근 조달청 가격정보지 및 물가정보지 등 3개 이상 정보지 중 최저가격 적용, 견적단가를 적용할 경우, 2개사 이상을 조사하여 최저가격 적용한다.

15) 본 과업수행 전반에 대한 관리ㆍ감독 권한은 발주자에 있고, 발주자가  임명하는 감독관의 지시․감독에 의해 수행한다.

16) 습기로 인한 작물의 피해가 없도록 바닥과 벽체는 방수가 잘되도록 하고, 출입물은  기밀성을 유지하되 지게차의 출입이 용이하도록 폭과 높이를 감안하여 설계한다.

17) 건축법 등 관계법규에 위배되는 일이 없도록 하고, 설계에 있어 의문 및 필요한 사항은 수시로 발주처와 협의 후 설계한다.

18) 신체부자유자나 장애자를 위한 경사로 (1층 입구), 화장실, 주차장 등 편의시설을 고려하여야 한다.

19) 모든 시설물은 기능의 충족, 건설 및 운용 시의 비용절감 등을 고려한다.

20) 발주처와 수시협의, 관할 관청의 인․허가 업무를 대행하여야 하며 그 결과를 설계에 충분히 반영하여 완벽한 설계도서를 작성하여야 한다.

21) 책임기술자(계약자)는 부지 및 현지 사전조사를 철저히 시행하여 건축면적, 수도용량, 저수조 용량 등 적정량을 산출하여야 하며 특히 기계, 소방, 전기, 통신 등의 분야별 제반 부하 및 용량을 산출하여야 한다.

22) 주차장은 진․출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록   하여야 한다. 특히 연구 기자재 반입 및 수송차량 등의 진․출입이 용이해야 한다.

23)  향후 입주기업 및 직원증가에 대비하여 공간 수요를 분석하고, 증축을 고려하여 계획한다.

나. 에너지 절약형 설계

1) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(개정 시 개정된 기준 적용)을  철저히 준수하여 설계하여야 한다. (고효율 시스템 및 자재사용)

2) 창호, 내·외벽, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형  구조로 설계하여야 한다.

3) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 활동 및 환경을 최적화하고  건물용도에 따른 적정 조도를 반영하여 설계하여야 한다.

4) 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법, 신·재생에너지 설비의  지원 등에 관한 규정에 의한 신·재생에너지 설비를 최대한 반영하여야 한다.

5) 설계 시 LCC(Life Cycle Cost)를 수행하여 준공 이후 유지관리비 절감 방안을  계획하여야 한다.

6) 창면적비 제한 : 건물의 전체 외벽면적에 대한 창 면적 비를 50%미만으로 제한한다.

다. 환경친화적 대지환경 조성 및 친환경적 설계

1) 합리적인 토지이용으로 쾌적한 환경을 조성한다.

2) 조경, 포장, 조경시설물, 외부 구조물, 우·오수 계획, 기타 시설은 환경    친화적으로 설계한다.

3) 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려하여  설계하여야 한다. (소음 진동관리법 제21조 (생활소음과 진동의 규제),     제 29조 (방음,방진시설의 설치 등)

라. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을  고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 출입 장소에 방역체계를 구축하고, 주요 출입 장소 및 중요 시설물에 대한  24시간 감시체계를 구축한다.

3) 방범 관련 데이터를 통합 관리 시스템에 제공하여 통합 운영 체계를 구축한다.

4) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법을    고려하여 경제적으로 설계한다.

5) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고,  방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

마. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에  따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의  영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계가 되어야 한다.

2) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초계획이 이루어지게 설계하여야 한다.

3) 신중한 터파기 계획으로 인접건물 침하대책을 고려하여 설계하여야 한다.

바. 공공기관으로 사회기여와 공공성을 확보할 수 있는 설계

1) 건물의 외관은 조형성, 상징성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과  조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영한다.

2) 장애인 편의를 위한 무장애시설 계획으로 사용자의 편의성을 증대하여야 한다.

3. 시설운영계획

가. 운영계획 및 시설물 유지관리

1) 그린바이오 벤처 캠퍼스는 창업·성장을 위한 개방형 혁신공간을 구축하고  전주기적 성장지원을 위한 R&BD Hub를 운영하는 시설로서 특성상 지속적  이고 체계적인 유지관리가 필수

2) 개방형 창업 생태계 조성(안정화) → 그린바이오 산업성장 기반 조성(활성화)  → 글로벌 그린바이오 HUB도약(자립화) 의 3단계를 거쳐 시장맞춤형 연구기반의  그린바이오 클러스터로 성장

3) 효율적인 그린바이오 벤처 캠퍼스 관리를 위해서 전문적인 시설관리와 생산 인력이  필요하며 이용자들이 체감할 수 있도록 전문성· 효율성 고려 및 철저한 관리 지향

- 관리 부재로 인한 시설가치의 부실화 방지

- 양질의 공공서비스 제공 유지

- 위험관리의 예방적 조치 고려

4) 시설물 유지관리운영의 주체는 강원테크노파크 이며 기타 부대시설의 조성,   유지 및 관리, 생산·유통체계확립을 위한 활동을 위해 운영에 만전을 기함

4. 시설 개요 및 면적 기준

가. 시설개요 및 면적

위 치	세부시설	면 적(㎡)	수 량	비 고
지하 1층	홀	102.0	1	복도 및 공용공간
	계단/엘리베이터실	32.0	1
	화장실	26.0	1
	전기실, 기계실 등	300.0	1
	소계	460.0
1층	홀	439.0	1	복도 및 공용공간
	계단/엘리베이터실	72.0	2
	화장실	94.0	2
	카페	248.0	1
	라운지	227.0	1
	오디토리움	151.0	1	1-2층 연결
	공유오피스	115.0	1
	기업지원실	115.0	1
	관리실	100.0	1
	멀티 컨퍼런스룸	432.0	1	2층 높이
	소계	1,993.0
2층	홀	367.0	1	복도 및 공용공간
	계단/엘리베이터실	72.0	2
	화장실	94.0	2
	테라스	140.0	1	면적제외
	공용연구실	100.0	1
	공동장비실	54.0	1
	소형사무실 (a형)	302.0	9
	소형사무실 (b형)	151.0	4
	개별연구실 (a형)	226.0	3
	휴게실	51.0	1
	오디토리움 연결공간(스탠드)	22.0	1
	소계	1439.0
3층	홀	486.0	1	복도 및 공용공간
	계단/엘리베이터실	72.0	2
	화장실	94.0	2
	테라스	160.0	3	면적제외
	연구사무실 (1∼4)	252.0	4
	연구사무실 5	50.0	1
	연구사무실 6	33.0	1
	개별연구실 A	67.0	1
	개별연구실 B	100.0	1
	개별연구실 C	84.0	1
	소형사무실	101.0	3
	중형사무실	180.0	2
	휴게실	51.0	1
	공용 회의실(대)	108.0	1
	공용 회의실(소)	67.0	2
	보관창고	63.0	1
	소계	1808.0
합 계		5,700

1) 상기 시설개요에 따라 적정 안배하여 배치하되, 각 실별 면적은 조정가능하고 필요한 시설을 제안할     수 있음 (허용범위 +3% 이내)

2) 주요시설의 구체적인 배치 및 면적 등은 과업수행 과정에서 발주기관과 협의하여 변경 및 확정

5. 분야별 설계지침

가. 공통사항

1) 과업수행자는 설계 시 과업지시서 및 지침에 의거하여 용역을 수행하고 발주자가 제시한 의견을 적극 수렴․반영하여야 한다.

2) 동 건물이 최적의 기능을 발휘할 수 있도록 유사시설에 대한 조사를 실시하여 제출하고 필요한 사항은 설계에 반영하여야 한다.

3) 각 세부시설은 시설개요에 따라 적정 안배하여 배치하되, 각 실별 면적은 조정가능하고 필요한 시설을 제안할 수 있음

나. 건축

1) 일반사항

(1) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 부동침하 우려가 없고 안전하여야 한다.

(2) 자연환경, 입지조건 등을 분석하여 계획에 반영하여야 한다.

(3) 차량의 진·출입과 보행자 동선을 분리하고 합리적이고 원활한 동선체계 확립

(4) 부지활용의 효율성 및 시설물 유지관리에 합리적인 건물 배치계획 수립

(5) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 한다.

(6) 각 기능별 유기적 관성을 고려하여야 한다.

(7) PD, AD, EPS, TPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가  출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보하여야 한다.

2) 건축계획 시 준수사항

(1) 건축허가(협의)시점에서 관계법규(입법예고 포함)에 적합하여야 한다.

(2) 현장을 답사하여 현장조건을 조사 한 후 현장 대지조건을 고려하여 토지  이용률 및 시설이용의 효율성을 극대화할 수 있도록 계획하며 이용자 및 방문자의 접근성과 편리함, 안전성을 고려하여 배치한다 (이용자 또는 보행자의 통행과 방문객의 일시적 휴식의 공간으로 함께 사용할 수 있도록  유기적으로 연계하여 계획하여야 한다).

(3) 대지 내에서 혼잡성이 최소화되도록 계획하여 대지의 효율성이 극대화되도록  하고, 각 프로그램이 유기적인 관련성 및 독립성을 가질 수 있도록 계획되어야   한다.

(4) 대지 고저차 및 주변 환경 조건을 극복할 수 있는 창의적인 아이디어를  반영한 특화계획을 제시하고, 사업성 개선을 위한 원가절감(공기단축    포함) 사항을 적극 모색한다.

(5) 옥외 생활범죄 방지 및 안전성 확보를 위해 시야를 가리는 시설물은 지양하고 열린 공간으로 계획한다.

(6) 저장물품의 입출고 및 차량의 진․출입과 보행자 동선 등을 고려한 합리적이고  원활한 동선체계를 확립하고 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 계획하며, 이를 위하여 가급적 건물내부 단차가 생기지 않도록 단면계획을 한다.

(7) 건물 외부형태 및 색상은 특성을 살릴 수 있도록 하고, 특히 주변시설과  조화를 이룰 수 있도록 계획한다.

(8) 기능에 적합하고 경제적인 자제를 사용(관급자재 및 주요자재는 현지 생간  공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영)

(9) 사업비 내에서 친환경 자재 사용 및 신재생에너지 적극 활용 (에너지 절약형  설계를 위한 창호, 내외벽, 지붕 등 모든 요소에 단열, 결로 방지, 기밀성  확보 등 에너지절약형 구조를 지향)

(10) 기계실은 장비반입 등 유지관리에 필요한 공간을 충분히 확보하도록    계획한다.

(11) 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 발주자의 기획과 의도를 반영,     합리적이고 구체적인 다양한 시행방안(규모, 타당성, 예상사업비 등)을   제시하여야 한다.

3) 평면계획

(1) 기능별·층별 조닝(zoning)을 통해 운영, 관리, 업무, 교육, 실험, 연구 등의  공간이 상호 유기적으로 연계하되, 이를 위한 지원시설도 효과적으로    연결되도록 계획하여야 한다. 이 때 명쾌한 동선분리로 혼잡이 발생되지  않도록 한다.

(2) 각종 시설물은 최소인원으로 운영 및 관리가 가능하도록 경제적인 설계가 되도록 한다.

(3) 실의 폭과 길이의 비는 에너지절약 및 자연채광·자연환기 등을 충분히 고려  하여 효율적으로 계획한다.

(4) 향후 수요 증가에 따른 증축 가능성을 고려하여 계획한다.

4) 교통 및 동선계획

(1) 입구, 실내진입, 로비 등 모든 곳에는 문턱을 설치하지 않으며, 어린이·  장애인·노약자에게 시설 사용의 장애가 없는 Barrier Free환경을 제공한다.

(2) 동선의 독립성과 혼용 등을 고려하고 피난 및 프라이버시 확보에 충실하게 계획한다.

(3) 차량동선은 교차되거나 혼재되지 않도록 계획한다.

(4) 본 시설로 진입할 때 차량과 보행로가 완전 분리되도록 하고 충분한 보도폭  확보 등 보행자 접근동선에 대한 방안 마련한다.

(5) 단지 내 기존주차장을 활용하고 건물 주변 주차공간은 작업관련 차량을 위한  주차공간으로 계획을 고려한다.

5) 구조계획

(1) 기초:지질조사보고서, 현장주변 자료를 검토하여 경제적이고 효과적인    기초방법을 채택하여 시공여건을 충족시킬 수 있도록 설계한다.

(2) 구조: 장기, 단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에  충분히 대처할 수 있도록 설계한다. 모든 구조체는 적재 및 운반기기    하중을 충분히 고려하여야 하며 진동, 충격에 견딜 수 있어야 한다.

(3) 구조계산 전산 시 입력데이터 명기할 것(프로그램 타당성, 공인여부, 해석방법, 적용하중 등 단계별 구체적 과정 설명)

(4) 구조물 우각부 등 취약부에는 반드시 보강계획을 명기한다.

(5) 지하수위로 인한 건물의 부력에 대한 안전성을 고려하여야 한다.

(6) 구조설계방법은 합리적이고 안전한 극한강도 설계법을 적용하도록 하며, 내진에 대하여도 검토하여야 한다.

(7) 추후 증축에 대하여 적정하게 검토되어야 한다.

(8) 합리적인 구조계획, 계산을 통해 어떠한 경우에도 안전하여야 하며, 사용상이나 미관상의 지장을 초래하는 처짐, 진동 등이 발생하지 않도록 하여야  한다.

(9) 구조는 경제적이며 시공 상 어려움이 없도록 설계하여야 하며 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우에는 이에 대하여 객관적으로   인정할 수 있는 공인기관의 기술검토서를 첨부하여야 한다.

6) 재료 및 색상계획

(1) 사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고 내구성, 내화성, 내후·내식성, 청결성, 내마모성이 우수하고 유지보수가 용이한 재질과 마감방법을 선택한다.

(2) 사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방 관련법 및 관계규정에 맞도록 설계한다.

(3) 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장 재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 한다.

(4) 사무실, 복도 등은 내구성을 고려하여 강도가 높고 오염이 덜되며 미끄럼을 방지할 수 있는 재료를 선정한다.

7) 지붕계획

(1) 누수 관련 하자가 발생하지 않는 재료로 설계한다.

(2) 루프 드레인의 수 및 구경은 최대 강수량 및 지중 면적 등을 고려하여 최대한 여유를 둔다.

8) 디자인계획

(1) 사업예정지의 여건(주변환경, 지역성, 사업성 등)을 종합적으로 고려한 디자인  모티브와 컨셉을 개발하여 주변과 위화감이 없도록 디자인 차별화 전략을 수립하고 외부특화, 색채, 사인 등을 고려하여 계획한다.

(2) 토탈디자인(안)이 실제로 구현될 수 있도록 관련 공종과 디자인 의도, 형태, 색채계획 등을 발주처와 검토 협의하여 최종설계안까지 반영될 수 있도록 수행  한다.

(3) 네트워크공간인 오디토리움, 멀티컨퍼런스룸은 그린바이오 주체 간 교류 활성화, 유관기관 간 네트워크 구축 및 활용을 위한 거점공간으로 설계 시 심미성,   효율성을 고려하여 계획한다.

다. 토목

1) 일반사항

(1) 설계도서는 본 지침서에 의거, 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획설계에 필요한 자료를 제공하여야 한다.

(2) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 건축물, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전에 조사 분석하여야 한다.

(3) 계획평면도는 공사계획도를 작성하고 우수계획평면도, 오수계획평면도, 포장계획평면도는 세분하여 작성한다.

2) 토질조사

(1) 토질조사는 대상지내에서 감독원과 협의하여 필요시 토질조사를 실시한다.

(2) 토질상태에 따라 시추는 충격식이나 회전식으로 하고 시험항목은 자연함수비, 건조밀도, 비중, 압밀 및 압축 등을 포함시킨다.

(3) 조사완료 후 배치계획 평면도에 시추공 위치를 표시하고 주상도, 지질단면, 현장 및 시험결과의 건의사항에 관한 사항을 제출한다.

3) 구내 우·오수 설계

(1) 건축물 내부에서 발생되는 오수와 외부의 우수가 원활히 배수될 수 있도록 하수도 시설기준에 적합하도록 설계하여야 한다.

(2) 배수시설 계획은 인접 우ㆍ오수관로, 맨홀의 위치 및 관저고, 최종 연결처리구의 용량 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영하여야 한다.

(3) 단면 결정 시 설계 최대 유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소 관경이 150 ㎜이상이 되도록 한다.

(4) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec 이상일 때는 맨홀을  설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 한다.

(5) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치하여야 한다.

(6) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 처리토록 하고 합류식일 경우에는 오수처리시설을 설계에 반영하여야 한다.

(7) 집수정을 설계 시에는 사업지 전체의 물순환 체계(water cycle system)와의 연계성을 검토하여 적절한 위치에 배치하여야 한다.

4) 부지정지설계

(1) 부지조성은 현 지형에서 토량의 이동이 최소가 되도록 한다.

(2) 부지내의 구배는 배수 등을 고려하여 결정한다.

(3) 부지 내 및 토취장에서 발생하는 암은 암유용 계획을 수립하여야 한다.

(4) 도로와 부지가 접하는 부분은 가능한 단차를 두지 않도록 하며, 부득이한 경우에는 차량이 부지 내 진입이 가능한 단차를 두어야 한다.

5) 도로 및 포장 설계

(1) 도로계획은 이용자의 편의를 감안, 합리적으로 계획하여야 하며 주변도로와 유기적으로 연결되어야 하고, 보행자의 안전을 고려하여 합리적으로 배치   하여야 한다.

(2) 도로구조시설에 관한 규칙 등 관련 규정을 준용하여 설계에 반영하여야 한다.

(3) 도로 및 주변광장 포장두께는 기능에 따라 이동하중 등을 감안하여 현장 여건에 따라 단면을 결정하되 동결심도를 고려한 최소두께 이상으로 설치하여야 한다.

(4) 포장면은 우수맨홀과 연계하여 설계하여야 하며 포장면은 적절한 구배를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하여야 한다.

(5) 보도 및 계단 처리 시에는 장애인을 고려한 시설로 설계한다.

6) 상수도 및 지하수

(1) 상수도는 인입관로 위치를 합리적으로 수립하여 가장 최단거리로 설계에  반영한다.

(2) 관매설의 깊이는 동결심도 및 기타 매설물을 고려하여 결정한다.

(3) 각종 변실은 도로 유지관리 등을 고려하여야 한다.

- 연약지반 및 암 구간에는 관로 및 구조물의 안정성을 검토하여 설계한다.

- 관 보호공, 이형관 보호공, 기타 구조물 설치는 감독관과 협의 결정한다.

- 관종 및 접합은 경제성과 유지관리 등을 감안하여 결정하고 변실 뚜껑은    발주기관과 협의 결정한다.

- 급수공급체계를 감안, 인접지의 급수량도 포함하여 설계한다.

7) 기 타

(1) 부지 경계부근은 도로, 인접 토지 및 구조물 등에 피해가 없도록 조치하여야    한다.

(2) 옹벽설치가 예상되는 경우에는 경제적이며 합리적인 설계를 하여야 하며 구조계산서를 첨부하여야 한다.

라. 기계

1) 용역의 범위

(1) 콘덴싱유니트, 응측기, 유니트 쿨러, 펌프류, 급기덕트, 제상설비, 냉매 및 냉각수 배관, 2차 전기설비 및 자동제어 설비, 사무실 냉난방 및 위생설비, 소방설비, 기타 방열문 등 발주처 요구사항

2) 기계분야 일반지침

(1) 관련 법․령․규칙 등을 설계용역 과업수행에 적용하여야 한다.

(2) 특용작물산업화지원센터 유사시설 창고에 적용된 기계설비 운용방식을 충분히 검토하여 미비점 및 문제점을 보완하여 설계하여야 한다.

(3) 본 과업에 적합한 기설치되어 운영하고 있는 저온저장고 자료를 충분히 수집·검토하여 시설별 요구조건에 충족할 수 있고 에너지를 절감할 수 있는 설비 방식을 적용한다.

(4) 향후 운영 등을 검토 분석하여 부하변동에 적정 대처할 수 있는 설비운용방식을 적용한다.

(5) 각종기계 및 시설물 유지관리를 고려하여 기계실 등의 크기를 검토 분석하여 향후 수리 및 교체가 용이하도록 설계한다.

(6) 급수배관자재는 내식성 자재를 사용하여야 한다.

(7) 소방법 등 관련법규에 적합하도록 설계하고, 유관기관과 충분한 협의 후   실용성, 경제성 등을 고려하여 열원 및 시설규모를 결정한다.

3) 위생설비

(1) 급수방식은 현장상황에 따라 발주기관과 협의하여 반영한다.

(2) 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수를 확보하여야 한다.

(3) 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급한다.

(4) 동절기에 각종 배관이 동파되지 않도록 고려하여야 한다.

(5) 위생기구는 K.S 제품 또는 동등 이상 제품을 사용한다.

4) 자동제어설비

(1) 자동제어설비는 각 건물규모에 적합한 것으로 선정하되 기능이 우수하고 온ㆍ습도조절 및 주요장비에 대한 제어 등 운영관리 상 필요한 각종 자료의 지시, 경보, 상태표시, 기록이 가능한 방식으로 하여야 한다.

마. 전기

1) 일반사항

(1) 고효율 에너지기자재 사용으로 에너지절감 및 제반 재해방지 목적에 만족하여야   한다.

(2) 토목, 건축, 기계, 통신, 소방 등의 공종과 연관성을 고려하여야 한다.

(3) 시공 및 유지관리의 용이성·경제성을 감안하여 설계하여야 한다.

(4) 전기설비는 미래 지향적인 기술을 적용하여야 한다.

(5) 최근 개정된 법령 중 KEC(한국전기기술기준) 및 전기설비기술기준 판단기준의 경우 두 개의 법령을 혼용하여 설계하여서는 안된다.

2) 수변전설비

(1) 부하의 설비용량 산출을 정확히 하여야 하며 적정 수용률, 부등률을 적용한다.

(2) 수배전실의 규모 및 배치의 적정을 기하여야 한다.

(3) 한전전원 인입점 타당성 여부를 검토하고 예비전원설비를 확보한다.

(4) 특별고압이나 고압으로 수변전설비를 설계할 경우, 수배전반은 내진구조로 하여야 한다.

3) 전력간선설비

(1) 전력간선설비는 전체 시설계획을 고려, 유도장애에 대한 대책을 강구하고, 감시제어, 전산 및 사무용 기기 등에 고조파 영향이 최소화되도록 계획 하여야 한다.

(2) 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락 시 허용전류 등을 고려하여 설계에 반영한다.

(3) 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선의 구성 및 용량을 결정한다.

(4) 케이블트레이 배선에 사용되는 케이블은 내화 또는 저독성 난연 케이블로 하고, 방화구획 부위를 관통할 경우에는 내화충진하여 방화구획 하여야 하며, 케이블 트레이는 내진형 구조로 한다.

(5) 금속닥트의 경우에는 주요 요소에 단면 상세도를 작성한다. 여기에는 내부 수용 케이블 등의 절연피복을 포함한 단면적 총합의 금속닥트 단면적에 대한 비율을  표기하고 방열 및 보수작업이 가능하도록 한다.

(6) 간선의 부하분담은 기능별, 용도별, 층별 등을 고려하여야 하며, 각 간선의 예비율과 각 분전반 예비율은 최소 20%이상 계획하도록 한다.

(7) 부하용량의 증가를 고려하여 간선규격은 20%이상 여유 있게 계획하되 최소 규격은 계통의 단락전류를 견딜 수 있어야 한다.

(8) 저압 전력간선은 동력용, 전등용, UPS 용으로 구분하고, 또한 일반용,   비상용 및 소방용으로 용도별로 구분하여 간선 사고 시 대응력을 갖도록 계획한다.

4) 동력설비

(1) 전동기의 용량에 알맞은 개폐기 및 전선 굵기로 선정하여야 한다.

(2) 사용전압 및 기동방법을 타당성 있게 선정하여야 한다.

(3) 역률개선용 콘덴서를 부착토록 설계하여야 한다.

(4) 전동기의 기동방법은 11KW 이하는 직입기동으로 하고, 15KW~45KW는 Y-Δ기동으로 하며, 55KW 이상은 리액터 기동으로 한다.

5) 조명설비

(1) 조도기준 설정 및 조도계산서를 작성하여야 한다.

(2) 조명설비는 근무자의 사무환경 개선에 따른 각종 항목(조도레벨, 눈부심의 보호각 등)에 대한사항과 실내마감 계획을 감안하여 모든 근무자가 쾌적함을 느끼도록 하여야 한다.

(3) 조명설비는 LED 조명기구로 전체 반영하고 고효율에너지 기자재 인증받은 제품과 한국표준협회의 KS 인증 받은 제품이어야 하며, 유지보수가 편리한 제품 제품이어야 한다.

(4) 용도에 적합한 등 기구를 선정하고 필요 시 실 폭 등을 고려하여야 한다.

(5) 조명기구 상세도에는 설계에 반영된 광원의 색과 성능을 알 수 있도록 색온도와 연색성을 표시하여야 하며, 조명기구별로 적용부위를 표기하여야 한다.

(6) EPS 실, TPS 실 및 일정규모의 설비용 파이프 샤프트실 등에는 조명기구를 설치하여 유지보수가 용이하도록 계획한다.

(7) 모든 건물의 현관등, 계단등, E/V 등에는 조도 자동조절 LED 조명기구를 적용한다.

(8) 비상조명은 소방 관련 법규상의 기준 및 기능유지에 지장이 없도록 계획한다.

(9) 체육시설 부분의 조명기구는 용도에 맞는 조명기구를 선정하여 설계하여야 하며, 유지보수에 지장이 없도록 하여야 한다.

6) 전열설비

(1) 전열설비는 일반적인 기기에 대한 회로와 OA 기기에 대한 회로를 분리하여야  하며 건축물 모듈에 맞게 수구를 설치하고 레이아웃변경에 유연하게 대응이 가능하여야 하며, 정보ㆍ통신설비 배선과의 상호 간섭을 최소화할 수 있도록 계획한다.

(2) 습기가 있는 장소의 콘센트는 별도의 분기회로로 구성하고, 누전차단기 정격 감도전류는 15mA이하로 계획한다.

(3) 콘센트 유니트 수는 최대 5개 이하, 각 실의 사용 기자재(용량, 3상 여부 등)를  정확히 파악하여 용도별로 구분하여 전원이 공급되도록 한다.

(4) 건축물은 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치를 설치하여야 하며, 대기전력 자동차단콘센트 또는 대기전력차단 스위치를 통해 차단되는 콘센트 수량은 거실 콘센트 수량의 30% 이상이 되어야 한다.

바. 통신

1) 일반사항

(1) 기존 통신설비에 대한 조사를 실시한 후 기존 통신설비와 연계될 수 있도록 설계   한다.

(2) 시설의 수요를 감안한 미래지향적 충분한 용량을 확보하여야 한다.

(3) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

(4) 주요장비는 설계 전 반드시 발주기관의 지침을 받아 설계를 진행하여야 한다.

(5) 설계 시 방재, 보안에 대한 고려를 하여야 한다.

2) 통신 설비

(1) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계하여야 하며, 조달청 우수제품, 신기술, 고효율, 친환경인증제품을 적극검토 반영하여야 한다.

(2) 기존 전화설비와 연계하여 발주기관에서 요구하는 위치에 설치되도록 설계하여야한다.

(3) 가장 경제적인 방식으로 설계함을 원칙으로 한다.

(4) 기존 인터넷 장비에 대한 조사를 실시하여 연계될 수 있도록 설계하여야 한다.

(5) 방송설비, A/V 설비를 검토하여야 한다.

(6) MATV 설비, CATV 설비를 검토하여야 한다.

(7) 기타 특수설비(CCTV 등)에 따른 적정설비설계가 되도록 한다.

(8) 이동통신설비를 검토하여야 한다.

사. 소방

1) 소방설비 일반사항

(1) 특정 소방 대상물의 종류와 용도에 대한 관련 법규 및 지방 자치 단체별 조례, 행정 처리 지침 등을 검토하여 준수한다.

(2) 심의 일정, 제반 규제 사항 및 권장 사항 등을 관련 관청과의 사전 협의를 통해 설계도서 작성에 반영한다.

(3) 설계 진행 주요 단계별로 건축, 구조, 기계, 전기, 통신 등 공종 상호간의 철저한 조정(coordination) 및 협력(interface)을 거치면서 시공 오차를 고려한다.

(4) 소방 설계도면, 설계설명서 등이 상호 일치되도록 작성한다.

(5) 타 설계 분야 건축, 기계, 전기 등 각 분야에서 작성한 기본설계서를 확인하여 소방시설의 기본설계도서에 적용한다.

(6) 건축도면의 요구 조건내용과 소방시설의 기본설계 도서가 일치시킨다.

2) 소방설비

(1) 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에 따라 특정소방 대상물의 규모·용도 및 수용인원 등을 고려하여 소방시설을  설치한다.

(2) 소방기계설비는 소화기구, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 물분무등  소화설비, 스프링클러설비, 소화용수설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 제연설비, 연소방지설비, 피난설비, 기타 필요한 설비 등을 소방법 및 화재  안전기준에 적합하도록 설치한다.

(3) 소방전기설비는 자동화재탐지설비, 시각경보기, 자동화재속보설비, 비상 방송설비, 유도등, 비상조명등, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 비상 전원설비, 기타 필요한 설비 등을 소방법 및 화재안전기준에 적합하도록 설치한다.

아. 에너지절약계획

1) 건축물의 효율적인 에너지관리를 위한 열손실방지 등의 에너지이용합리화를 위한 조치는「녹색건축물 조성 지원법」, 「건축물의 에너지절약설계   기준」 및 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 적합할 뿐만 아니라, 에너지절약형 및 고효율에너지 기자재를 설치하도록 설계하여야 한다.

2) 신·재생에너지, 빗물재활용시스템 설치 등 미래지향적·친환경·에너지 절약형 건축물을 지향하여 주변환경과 조화를 이루면서 건축물 에너지  효율을 높인 친환경 건축계획을 구현한다.

3) 건물의 방위에 따른 배치, 용도 및 사용시간 등에 근거하여 평면계획과 조닝계획, 건축 구조체 축열 및 축냉 효과를 활용할 수 있는 시스템을 고려하여 설계한다.

4) 건물의 방위설정은 건물에의 접근, 대지의 고저 및 향, 조망, 통풍, 냉난방 등을 감안하여 설정하되, 계절별 특성과 태양 궤적, 풍향 등을 감안하여  자연에너지를 최대한 활용할 수 있도록 실 배치, 창호 등을 계획한다.

5) 서쪽 면에 접한 실의 창호 외부에는 태양입사각에 따라 차양시설 등을 계획  한다.

6) 반투명·투명, 낮은 내부 칸막이를 이용하고 창의 형태 등을 검토하여 주광의 집성을 극대화한다.

7) 외벽, 지붕, 창호 등에서 발생하는 열교현상을 최소화하고, 외부 출입구에는 방풍실을 계획한다.

8) 에너지절감 및 국가정책에 부합하고자 신재생에너지(지열, 태양광발전 등) 설비의 설치를 사업비의 범위 내에서 검토한다.

9) 절수기기(절수용 변기, 절수용 음수대 등 )설치를 적극 도입 계획한다.

※ 관련규정

(1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2019-97호)

(2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부 고시 제2015-1108호)

(3) 건축물 에너지효율등급 인증 기준(국토교통부 고시 제2015-1019호)

(4) 녹색건축 인증 기준(국토교통부 고시 제2014-705호)

(5) 기타 에너지 관련 제반 규정

자. 무장애계획

1) 장애인, 고령자, 임산부 및 영유아 등 사회적 약자(교통약자)가 쉽게 이용할 수 있도록 유니버설디자인(Universal Design) 요소를 고려한 공간을 계획한다.

2) 무장애 계획은 이용자의 접근성, 안전성, 식별성에 목표를 두고 설계하고 비장애인은 물론 장애인이 이동할 때 불편함이 없도록 건물 내·외부공간에 장애물이 없도록 한다.

3) 장애물 없는 생활환경(Barrier-Free)인증지표 및 심사기준에 따른 인증을   취득할 수 있는 수준으로 계획하여야 한다.

4) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 및 관련법령의 기준에 적합하게 설계한다.

※ 관련규정

(1) 장애물 없는 생활환경(Barrier Free) 인증 제도 시행 지침(국토교통부 지침 제2013-8호)

(2) 교통약자법

(3) 장애인·노인·임산부 편의증진보장에 관한 법률

차. 실내 환경 디자인 계획

1) 2020년 4월 개정된 「실내공기질관리법」에 따라 다중이용시설의 실내공기질 유지기준이 강화되었으므로, 해당 시설도 구체적인 실내 환경 조건을 검토하여 포스트 코로나 대응 및 감염병 등 감염관리 차원에서 기계식 환기설비 또는 환기창을 확보하고 공용 공간으로 오염된 공기가 유입되거나 확산되지 않도록 고려하고 실내 채광을 위한 채광창 확보 등 쾌적한 실내환경을 조성한다.

카. 안전사고 및 민원 관리 계획

1) 공사 시 소음, 분진, 진동 발생에 대비한 철저한 공사 관리 계획을 수립할 것

2) 건축물 내·외부 마감재, 창호 등 철거 과정 상 각종 안전사고 발생에 유의하고, 건축 폐자재 재활용방안을 적극 강구할 것

3) 시공시, 공사장 펜스 및 가림막 등 가설물 설치, 자재 적재 등으로 보행도로가 점용되지 않도록 공사장 관리에 유의할 것

타. 기타 유의사항

1) 수급인은 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용 계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의 및 승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

2) 설계는 현황측량을 실시하여 측량성과도를 기준으로 진행한다.

3) 지질조사 공수는 NX 3공 이상이며, 사전에 위치 선정 등 지질조사 계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지질조사를 시행한다. (지질조사 후 완료보고서 제출)

4) 수급인은 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

5) 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가   없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

6) 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토/반영하여야 한다.

7) 본 사업과 관련하여 특별히 고려하고 주의해야 할 사항, 발주자의 요구사항에 대해서는 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

Ⅳ	설계단계별지침

1. 계획설계

가. 정의

□“계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야 (구조, 기계, 전기, 토목, 조경, 수처리 등)의 기본 시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 확인을 받는 단계이다.

나. 업무내용

1) 설계대상이 되는 건축물의 용도, 규모, 형식 등의 설계상 기본적 조건을 확정하기 위해 필요한 기초적 조건에 관한 조사, 계획, 검토 등의 업무

(1) 각종 법령 검토 및 이에 따른 제약조건 정리

(2) 부지의 입지조건

(3) 자연적 환경 조건 : 기상, 지형ㆍ지질, 동ㆍ식물, 수리ㆍ수문 등

(4) 사회·경제적 환경 : 인구·주거, 교육, 교통, 문화재 등

(5) 생활·환경적 조건 : 토지이용, 대기질, 수질, 토양, 폐기물, 소음·진동 등

(6) 건축물의 배치 계획상의 조건

2) 현장조사

(1) 문헌 및 서류조사

(2) 현장조사 :주변과의 환경적 조화를 고려하고, 주변건축물의 외관적 특징을 조사

3) 공사비 예산 확정을 위해 필요한 업무

(1) 유사규모 건축사례의 공사비 적정성 검토

(2) 개략 설계에 따른 공사비 산출

다. 제출도면

□ 제출도면은 국토교통부장관이 고시한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와  대가기준”[별표 2]에 의한 계획설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성·제출한다.

2. 중간설계

가. 정의

□“중간설계(건축법 제 11 조제 3 항에 의한 기본설계도서를 포함)”라 함은 계획 설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관  분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 확인을 받는 단계이다.

나. 업무내용

1) 계획을 실행하기 위한 공사비 및 시공성의 검토

2) 시설 입면, 평면, 단면 계획의 수립

3) 구조 및 토목 계획의 수립

4) 각종 설비(전기, 통신, 급배수, 위생, 소화, 공조, 환기, 냉난방등)계획의 수립

5) 에너지 절약계획의 책정 및 대체에너지 설비계획(관계규정의 의무비율 적용)

6) 인허가 및 승인을 위한 기술 자료의 작성 및 기술적 검토

7) 관계기관 및 이해 당사자의 의견 등에 관한 기술적 검토

8) 지반조사 및 인접 구조물의 조사에 관한 기술적 검토

9) 기타 발주자 및 수요자 요구사항 검토 자료 수립

다. 제출도면

□ 제출도면은 국토교통부장관이 고시한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와  대가기준” [별표 2]에 의한 중간설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성·제출 한다.

3. 실시설계

가. 정의

□“실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한  설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후 설계 관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건  반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 업무내용

1) 중간설계에 의한 설계조건 및 설계방침 결정

(1) 외·내부 공간 및 입면, 평면, 단면 등 상세설계

(2) 배관ㆍ배선 등 각종 설비의 상세설계

(3) 각 부분 사용 재료 및 시방의 결정

(4) 유지관리 및 관계 법령 등의 조합 및 검토

(5) 공사비의 검토

(6) 관련시설 및 수요자의 요구사항 결정

2) 공사시방서 작성

□ 설계자는 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 관계법규 및 규정에 따른 설계기준, 공사 표준시방서에 맞게 작성하고 자재․입찰절차․공사비․ 공사여건 등을 고려하여 공사조건에 적합하게 내용을 수정․보완하여야 하며, 필요시에는 관련 표준시방서와 참고자료를 이용하여 작성하여 발주자의 확인을 받아야 한다.

3) 색채와 재료 선정

□ 설계자는 색채와 재료의 견본을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 하며,  재료의 지정 색은 주변과의 색상조화를 고려하고, 색채계획은 전체적인 색상(외부 및 실내마감재)이 조화가 이루어지도록 계획한다.

4) 공사비 산출

(1) 설계자는 실시설계 시 총사업비 및 예정공사비를 감안하여 공사비 통제를 하여 설계 단계별로 확인하여야 하며, 변경이 필요할 때는 발주자에 자문 또는 승인을   받는다. 만약, 공사비 한계를 초과할 우려가 있는 경우 설계자는 즉시 발주자에게 보고 및 비용 절감을 검토하여야 하며, 공사비가 예산 범위 내 작성될 수 있는 의견을 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.

(2) 발주자는 공사 시행을 위한 예산조정을 위해 수시로 공사비 산출금액 등을 요구할 수 있으며, 설계자는 이에 즉시 산출서를 작성·제출하여야 하며, 예산 범위 내 공사가 될 수 있도록 조치하여야 한다.

(3) 설계자는 총 공사비 산출서를 작성한 후 발주자에 제출하여 확인을 받아야 한다.

다. 제출도면

□ 제출도면은 국토교통부장관이 고시한 “공공발주사업에 대한 건축사업무범위와  대가기준” [별표 2]에 의한 실시설계의 도서내용에 따라 성과품을 작성·제출한다.

4. 분야별 설계요령

가. 건축분야(배치계획)

1) 배치계획

(1) 주 건물, 부대시설, 주차장 등 전체적인 배치는 그린바이오 벤처 캠퍼스의 특징을 살리고, 교통체계, 주변 환경을 분석하여 조화롭고 쾌적한 환경을 조성해야 한다.

(2) 각종 폐기물, 위험물 등의 보관시설은 위험을 최소화하고, 반출이 용이하도록 별도 공간에 배치하며, 환기․통풍 시설 등 안전성을 고려한다.

2) 건축물 배치

(1) 사업대상지의 대지가 고저차가 있는 2개의 필지에 위치하므로 지형활용 방안을 마련하고, 장래 서측 필지의 그린바이오 클러스터 기반조성시 증축을 고려하여  개방적 진입광장을 계획한다.

(2) 전면도로 및 북측 평창대로에서의 경관과 남향 일조환경을 고려한 매스를  계획해야 한다.

3) 외부동선 및 외부공간

(1) 외부공간은 이용자의 동선을 고려하여 정원 등 휴게시설로 활용하여 쾌적하고 편안하게 휴식을 취할 수 있는 하나의 매력적인 공간으로 조성한다.

(2) 대지 내 차량 진출입로 조성방안을 마련하고 진입로는 보차분리 환경으로 조성 하여 차량 진출입으로 인한 보행로의 단절을 최소화하여 계획한다.

(3) 사업대상지는 고저차를 활용하여 건축영역과 주차영역으로 구분하여 계획하였  으므로 서비스차량 및 장애인 주차영역을 고려하고 건축물과 인접하여 차량이 접근할 수 있도록 차량동선 계획을 고려한다.

(4) 대형차량의 주차공간과 작업차량의 하역공간 등을 고려하여 충분한 회전반경 및 출입동선이 확보될 수 있도록 주차 및 동선을 고려한다.

(5) 화재·비상시를 대비한 피난동선 및 소방진입용 동선(소방차로)을 계획한다.

(6) 건축면적 이외에 휴게, 조경 등 외부공간의 종류와 기능, 규모를 구체적으로 명시한다.

(7) 장래 서측 필지의 그린바이오 클러스터 기반조성을 고려하여 운영프로그램과   연계된 외부공간을 계획한다.

(8) 자전거 및 이륜차(오토바이) 이용자를 고려한 보관 및 주차공간을 조성해야 한다.

나. 건축분야(평면계획)

1) 평면계획

(1) 마감재는 각 실별 용도에 적합한 재료로 계획하며, 내구성을 갖추면서도   유지관리가 용이하여 경제성과 효율성이 확보되도록 계획한다.

(2) 각종 시설은 관리 및 통제가 용이하며, 최소한의 인원으로 운영․관리가   가능하도록 설계한다.

(3) 동선계획은 중요 시설의 보안유지가 가능하면서, 화재 등 비상시 신속한 대피가 가능하고 장비 및 물품 반출입이 원활하게 이루어 질 수 있도록 계획한다.

(4) 부지 내 원활한 차량순환과 비상차량(소방차 등)의 진입이 가능하도록 한다.

(5) 업무시설의 각 사무실은 서로 연계성을 갖도록 배치하여 근무자가 효율적이고 편리한 업무공간이 될 수 있도록 계획한다.

2) 조닝

(1) 네트워킹 중심공간, 연구중심공간, 사무중심공간 등이 상호 유기적으로  연계되도록 계획한다.

□ 1층: 네트워킹 중심 공간

- 기업-기관-전문가들의 개방형 토론, 세미나, 홍보의 공간으로서 오디토리움과 멀티컨퍼런스룸, 공유오피스 등을 배치하여 적극적이고 개방적인 네트워킹 공간

□ 2층: 연구 중심 공간

- 공용연구실, 기초분석실, 자원은행을 포함한 각 입주기업의 연구실을 집중  배치하여 R&D를 바탕으로 사업화를 추진하고 성과를 제고하는 실무와   성장의 공간

□ 3층: 사무 중심 공간

- 사무공간, 회의실 및 테라스 조성을 통해, 연구와 사무, 독립업무와 협업  업무를 편리하게 진행할 수 있는 업무와 휴식, 창의와 협력의 공간

(2) 입주기업 전용공간과 공동이용공간으로 구분하여 구성하되, 전용공간은 프라이버시와 보안을 우선으로 고려하고 공동이용공간은 휴게와 소통, 교류, 협업 등의 장소로서 상호 유기적으로 연계 가능한 공간으로 조성한다.

(3) 저층부는 접근성을 고려한 대외협력공간(지원, 회의실 등) 및 공동이용공간(카페, 라운지, 공유오피스, 기업지원실, 실·내외 휴게공간 등)을 배치해야   하며, 중층부는 업무공간으로 구성하되 층별 휴게공간을 계획하여 쾌적한 업무환경을 조성한다.

3) 실별규모(스페이스 프로그램)

(1) 설계 시 층별 기능에 따른 층고계획 및 입주기업 수요조사에 근거하여  필요실을 계획한다.

(2) 실별 면적 산출의 근거가 되는 수용인원(방문객 수, 상주·비상주 직원 수, 입주기업·기관 종사자 수 등)은 소요면적 산정, 코어 및 피난계획을 위한 중요 요소이므로 면밀히 검토하여 계획한다.

(3) 그린바이오 벤처 캠퍼스 도입 기초 분석장비(시료준비, 시료분석, 분석기기, 뱅킹장비, 배송장비 등)를 고려하여 계획한다.

(4) 각종 부속공간(각종 장비 및 기구 수납, 창고 등)이 누락되지 않도록 유의하며, 창고는 입주기업 지원용 창고와 관리용 창고를 구분하고 관리용 창고는 관리실 또는 주차장과 인접한 위치에 배치하도록 계획한다.

Ⅴ	제출도서 및 작성기준

가. 설계도서 작성 일반사항

1) 설계도서의 작성방법은 본 과업지시서에서 정하는 바에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 "발주기관"과 협의한 후, 후속작업을 진행하여야    한다.

2) 설계도서의 작성은 「건설기술 진흥법」제48조(설계도서의 작성등), 같은 법 시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부 고시“건축물의 설계도서 작성기준”등 관련규정을 따른다.

3) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정,  삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서,  관급시방서를 말한다.

(1) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서 등을 기준으로 작성한다.

(2) 특별시방서는 자재관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

나. 설계도서 작성요령

1) 계획설계

(1) 기획업무 내용을 바탕으로 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관적 측면에서 설계목표를 정하고 가능한 해법을 제시하는 단계로서 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다)의 기본시스템이 검토된 계획안을“발주기관”의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하여야 한다.

(2) 설계서의 구성은 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표2] 건축설계에서의 도서작성에 따른 계획설계의 도서내용을 포함하여야 한다.

2) 중간설계

(1) 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토를 진행하여 연구분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성  하여 "발주기관" 의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하여야 한다.

(2) 설계서의 구성은 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표2] 건축설계에서의 도서작성에 따른 계획설계의 도서내용을 포함하여야 한다.

3) 실시설계

(1) 계획, 중간설계를 바탕으로 입찰, 계약 및 시공에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 구체적으로 결정하여 설계도서를 작성하며 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리 업무 단계에서 수행방법 등을 명시하는 등 "발주기관"의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종적으로 납품하여야 한다.

(2) 관련 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게  산정하여야 한다.

(3) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

(4) 설계서의 구성

① 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표2]건축설계에서의 도서작성에 따른 실시설계의 도서내용을 포함하여야 한다.

② 기타 필요 내용

설계에 수반되는 각종 자료 또는 심의, 보고, 사업시행계획인가(유관부서 협의 등 포함), 설계변경과 그에 수반되는 설계도서, 제출자료(조치결과보고 포함) 등

장애물 없는 생활환경 인증 등 기타 인증에 필요한 관련 자료(필요 시)

에너지절약계획서 및 관련 자료(필요 시)

공사발주를 위한 자료제출 및 절차 이행(계약심사, 일상감사 포함) 자료

각종 설계자문협의회 심의 조치자료(필요 시)

각종 인·허가, 승인, 신고에 필요한 서류 작성 및 협의(건축허가, 산지전  허가, 장애인편의시설, 신재생에너지 설치, 경관디자인, 정보통신설비 등) 자료

* 과업에 필요한 각종 비용은 본 설계용역비에 포함된 것으로 본다.

4) 설계도면 표기

(1) 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 (계약예규)용역계약일반조건에 의한다.

(2) 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

공 종	건축	건축구조	토목	조경	기계	전기	통신	소방기계	소방전기
기 호	A	S	C	L	M	E	ET	MF	EF

(3) 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

각종 사용자재의 설치 상세도 작성 후 관련 평면도에 명기

각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

각종 설비 및 구조연결 부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기

각종 부착물 및 부품에 대한 명시

특수공법에 대한 공인기관의 기술검토 보고서 첨부 및 설명서(상세도)의 작성

도면이해를 위한 주기사항 및 시공시 유의사항을 명시

부호, 방향KEY PLAN, GRAPHIC SCALE, ROOM NAME 등

계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

계통설명도

수량집계표

건축, 기계설비, 전기, 통신 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여  명확한 구분 표시

국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

기타 관련규정에 따라 요구되는 사항을 명기

5) 설계도면 작성

(1) 제도용지(트레이싱 페이퍼)는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

(2) 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선 등이 식별 가능하도록 상세하게 표시한다.

(4) 건축, 토목, 기계설비, 전기, 통신도면은 "발주기관"의 지시에 따라 동일한 축적으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

(5) 설계도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며, 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 명시하여야 한다.

(6) 기타 설계도면의 내용 및 작성기준은 국토해양부 고시“건축물의 설계도서 작성 기준”등 관련규정을 따른다.

다. 시방서 작성요령

1) 표준시방서를 기준으로 설계 내용에 부합되도록 공사시방서를 작성하고, 표준시방에 없는 공종인 경우 별도 특기시방서를 작성한다.

2) 신공법 적용 시에는 공법에 대한 설명과 이에 따른 관계자료 등 검토보고서를 제출하고“발주기관”과 협의하여야 하며 협의 후 관계자료를 첨부한다.

라. 내역서 작성요령

1) “설계자”는 용역 성과품 제출 시 건축, 기계․설비, 토목, 조경, 전기, 통신 (전화, 인터폰, TV, 방송설비, 무대장치), 소방 등 각 분야별로 내역을 분리하여 작성 제출하여야 하며, 총괄서류는 “발주기관”과 협의하여 제출하여야 한다.

2) 예산내역서의 작성은 일위대가표 및 정부제정 관련공사 표준품셈을 적용하여 한다. 실적단가를 적용할 경우에는 국토교통부 실적단가집 또는 조달청 실적단가를 기준으로 작성하며, 임의로 타 공사의 내역단가를 적용하여서는 안된다.

3) 공사비 내역서는 “예정가격작성기준”을 따른다.

(1) 재료비

조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격)으로 한다.

조달정보지에 미수록된 자재는 기획재정부에 등록한 전문기관에서 조사, 공표한 3이상의 물가지 가격 중에서 최저가격을 적용한다.

상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 3개 이상의 사업자에 대하여 당해물품의 거래가격을 현장조사를 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

규격제품 중 조달청 3자단가 등록제품에 대한 관급자재(시멘트, 철근, 레미콘 등)는 조달수수료를 포함하여 도급공사 금액과 별도로 작성한다.

(2) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 시중노임을 적용한다.

경비, 일반관리비 및 이윤 등은 예정가격 작성요령과 관련법에서 정하는 법적부담금과 조달청에서 공고한 각 공사별 제비율 적용기준에 준하며, 모든 경비 등은 법적요율 이내로 적용한다.

안전관리 및 품질관리 등에 대하여 해당 규모에 적정한 내용을 시방서에 명기하고 필요한 비용을 내역에 반영한다.

4) 공사비에는 지장물 철거비, 폐기물처리비, 지장물 이설비, 한전인입비, 상수도 인입비, 시운전비(전기, 기계)등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

5) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것.

6) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

7) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 함.

8) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

9) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야   한다.

10) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역 첨부

마. 설계진행 시 제출서류

1) 착수 시(계약 후 7일 이내)

□ "설계자"는 용역착수 시 다음의 제반서류(이하 “착수계”라 한다.)를 2부 제출하여야 한다.

① 착수계 1부.

② 책임기술자 선임계 1부 [서식1]

③ 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부 [서식2]

④ 설계용역 수행 조직표 1부 [서식4]

⑤ 하도급 승인 요청서 1부(하도급 계약 전 승인요청 제출, 착수 후 2주    이내) [서식3]

⑥ 각 공종(건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 기타)의 분야별 참여자 명단 [서식5], 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 등 각 1부

⑦ 보안각서 각 1부 [서식7]

⑧ 설계용역 예정공정표 1부

⑨ 계약금액에 대한 산출내역서 1부

⑩ 인력, 장비투입 예정현황 1부

⑪ 기타 "발주기관"이 필요하다고 인정하는 사항

2) 계획설계 제출 시 : 설계도서 작성요령 “계획설계” 참조

① 설계검사원 2부.

② 계획설계 도서 작성요령에서 설계서의 구성으로 정한 사항

③ 납품도서 일체

④ 기타 "발주기관"이 필요하다고 인정하는 사항

3) 중간설계 제출 시 : 설계도서 작성요령 “중간설계” 참조

① 설계검사원 2부.

② 중간설계 도서 작성요령에서 설계서의 구성으로 정한 사항

③ 납품도서 일체

④ 기타 "발주기관"이 필요하다고 인정하는 사항

4) 실시설계 제출 시(설계용역 준공 시) : 설계도서 작성요령 “실시설계” 참조

① 설계검사원 2부.

② 설계용역 손해배상보증보험서 1부.

③ 실시설계 도서 작성요령에서 설계서의 구성으로 정한 사항

④ 납품도서 일체

⑤ 기타 "발주기관"이 필요하다고 인정하는 사항

단계	납품시기	비고
계획설계	착수일로부터 1개월 이내
중간설계	착수일로부터 2개월 이내
실시설계	착수일로부터 4개월 이내	허가 포함

바. 성과품의 납품시기

사. 성과품 종류 및 납품부수

1) 계획(기본)설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	비고
1	계획설계(안)	A3	5	부	(안) 별
2	건축(시설물)계획(안)	A4	5	부	(안) 별
3	계획설계 보고서	A4	5	부
4	현장조사보고서	A4	5	부
5	지질조사서 및 측량성과도	A4	5	부	해당 시 제출
6	관련법규 검토서	A4	5	부
7	계획설계 조감도	A2	5	부	폼보드
8	위 사항 기록USB	USB	2	SET

※ 위 제출목록은 책자로 양면인쇄 무선무사철로 좌철하며, 전체를 USB에 저장하여  제출한다.

※ 납품수량은 발주처의 필요로 추가 요구 가능하며 설계자는 이에 협조하여야 한다.

※ 납품도서내용은 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표2]에 대한 도서내용을 준용한다.

2) 중간(기본)설계 납품도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	수량				비고
					건축	토목	조경	기타
1	중간설계보고서	A4	5	부	○	○	○		설계설명서포함
2	설계도면	A3	5	부	○	○	○		전공종분리
3	관련법규 검토서	A4	5	부	○	○	○	○	인증관련법령검토
4	내역서(관급내역서)	A4	5	부	○	○	○		개략공사비
5	계 산 서	A4	5	부	○	○	○
6	시 방 서	A4	5	부	○	○	○		특기시방
7	위 사항 기록USB	USB	2	SET	○	○	○	○

※ 1. 위 제출목록은 책자로 양면인쇄 무선무사철로 좌철하며, 전체를 USB에 저장 제출

2. 건축도면에는 전 공종 포함 전체본을 제본한다.

※ 납품도서내용은 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표2]에 대한 도서내용을 준용한다.

※ 납품수량은 발주처의 필요로 추가 요구 가능하며 설계자는 이에 협조하여야 한다.

3) 실시설계 납품도서

(1) 용역준공 15일 전에 최종보고회를 개최하여야한다.

(2) 종결보고서

① 종결보고서에는 설계설명서, 법규검토조서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황(공종, 기술자격, 참여기간 등) 수정·보완   지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 컬러에 대한 의견,  건축물  유지관리계획서, 납품설계 도서목록 등 일체 A4 규격의 책자로 양면 인쇄 무선무사철로 좌철한다.

② 공사별 현장설명서(A4) : 발주처 요구부수

③ 납품되는 일체의 과업내용 전체를 USB에 저장하여 제출한다.

(3) 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 A3 규격으로 정확하게 작성 및 제출한다.

4) 공종별 실시설계서 납품 도서

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공종				비고
					건축	토목	조경	기타
1	종결보고서	A4	5	부	○	○	○
2	설계설명서	A4	5	부	○	○	○		법규검토서 포함
3	설계도면 반접	A2	2	부	○	○	○	○	각종 상세도 포함
	설계도면	A3	5	부	○	○	○
	설계도면 반접	A3	2	부	○	○	○
4	계 산 서	A4	5	부	○	○	○		각종 설계계산서
5	내 역 서	A4	7	부	○	○	○	○	공내역 2부 포함
6	관급내역서	A4	5	부	○	○	○
7	수량산출서	A4	5	부	○	○	○
8	단가산출서	A4	5	부	○	○	○		견적서 포함
9	구조계산서	A4	5	부	○	○
10	일위대가표	A4	5	부	○	○	○
11	일반시방서	A4	5	부	○	○	○
12	특기시방서	A4	5	부	○	○	○		연계시방서 포함
13	관급시방서	A4	5	부	○	○	○
14	조감도(2면)	A2	2	부	○				액자 포함
15	공사예정공정표	A3	5	부	○	○	○		전공종 포함
16	인허가 및 관계법규에 따른 각종 인증취득 서류	A4	각 1	부				○
17	보험(공제)증서 원본	A4	1	부				○
18	건축허가서(협의)		각 1	부
19	기타 발주처 요구사항		2	부	○	○	○	○
20	위내용 전체기록 USB		2	SET	○	○	○	○	공종별 통합

※ 세부작성 목록은 설계도서 작성기준에 의하며, 조감도는 별도로 A4 규격 6매 제출, BF 설계도서 “별책”제출 3부 (해당시)

※ 납품도서내용은 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 [별표2]에 대한 도서내용을 준용한다.

※ 납품수량은 발주처의 필요로 추가 요구 가능하며 설계자는 이에 협조하여야 한다.

Ⅵ	각종서식

【서식1】  책임기술자선임계

【서식2】  설계용역 참여기술자

【서식3】  하도급 승인 요청서

【서식4】  설계용역 수행 조직표

【서식5】  분야별 참여자 명단

【서식6】  공동수급협정서

【서식7】  보안각서

【서식8】  (계획, 중간, 실시) 설계 검사원

【서식9】  주간공정보고

【서식10】 월간공정보고

【서식11】 과업수행 회의 결과서

【서식12】 인력, 장비투입 예정현황

【서식 1】

책임기술자 선임계

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 :

4. 착수  일자 :

5. 완료예정일 :

아   래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가  수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2023년     월     일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                          (인)

(재)강원테크노파크원장 귀하

【서식 2】

설계용역 참여기술자

(회사대표, 책임·분야별·참여기술자 등)

구분		회사명	대표자	참여기술자			자격증 번호	비고
				성명	주민등록 번호	자격명
사업책임기술자
분야별 기술자	건축
	구조
	토목
	조경
	전기
	통신
	소방
	기타

【서식 3】

하도급 승인 요청서

공사명
시공업체	대표자		연락처
	사업자등록번호		면허종별 및 번호
	주소
하도급업체	대표자		연락처
	사업자등록번호		면허종별 및 번호
	주소
도급한도액
원도급액
하도금액
공사기간
계약일

2023년     월     일

위 요청인 :               (인)

【서식 4】

설계용역 수행 조직표

	성명
	자격
	생년월일

【서식 5】

분야별 참여자 명단

용 역 명 :

용역기간 :

용역회사 :

용역참여자 (총괄·분야별·책임 및 참여기술자)

연별	분야별	설계참여기술자					서명 (실명)
		참여세부 과업내용	참여기간	성 명	생년월일	자격증번호

【서식 6】

공동수급협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 「그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업」기본 및 실시설계용역을 (   ) 와 (   )가 공동으로 수급하는 업무를 수행함에 있어 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동수급 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

업  체  명 :

소  재  지 :

대표자성명 :

제3조 (공동수급의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동수급업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명:                              ( 소재지 :            대표자 :              )

2. 업체명:                              ( 소재지 :            대표자 :              )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동수급업체(자)의 구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발표하며, 본 업체(자)는 기본 및 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동수급업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리·의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제9조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동수급 협정서를 체곌하고 그 증거로 협정서 (  ) 통을 작성하여 각 통에 구성원이 날인하여 각각 보관한다.

2023년   월    일

대표업체

업  체  명 :                           (전화번호)

소  제  지 :

대  표  자 :                           (인)

공동업체

업  체  명 :                           (전화번호)

소  제  지 :

대  표  자 :                           (인)

(재)강원테크노파크원장 귀하

【서식 7】

보 안 각 서

용 역 명 :

계약일자 :

착수일자:

완료예정일:

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제 35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에 귀속됨을 알고 별도로 발주처의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2023년     월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 :

성        명 :                          (인)

(재)강원테크노파크원장 귀하

【서식 8】

[ 계획(기본), 중간, 실시 ] 설계 검사원

1. 용  역  명 :

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 :

4. 착수  일자 :

5. 완료예정일 :

붙        임 :

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2023년     월     일

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                          (인)

(재)강원테크노파크원장 귀하

【서식 9】

주 간 공 정 보 고

용 역 명 :

용역개요

현장위치 :

용역기간 : 2023년  월  일 ~  2023년  월  일

계약금액 :

구분	전주진행사항 (2023. . )	금주진행사항 (2023. . )	비고 (진행률)
업무내용	인원투입현황 외주작업진행현황 등 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

용역진행사항

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :

책 임 기술자 :                          (인)

(재)강원테크노파크원장 귀하

【서식 10】

월 간 공 정 보 고

용 역 명 :

용역개요

현장위치 :

용역기간 : 2023년  월  일 ~  2023년  월  일

계약금액 :

용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2023. . . ~ 2023. . . )	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
넷째주
다섯째주
익월	공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :

책 임 기술자 :                          (인)

(재)강원테크노파크원장 귀하

【서식 11】

과업수행자간 주요내용 회의 결과서

용 역 명 :

회의내용

회의일자 / 장소 : 2023  년  월  일 /

참석자 :

회의결과에 다른 설계 및 시방서 반영여부

구분	과업수행 회의 결과	비고
건축 토목 조경
기계 소방
전기 소방
통신
		다음 장에 계속

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :

책 임 기술자 :                          (인)

(재)강원테크노파크원장 귀하

【서식 12】

인력, 장비투입 예정현황

공 종 별																	계
	보통인부
	기술인부
	보통인부
	기술인부
	보통인부
	기술인부
	보통인부
	기술인부
계	보통인부
	기술인부

인력투입계획

장 비 명																계
계

2. 장비투입계획